태권도 유단자 귀촌마을 조성

			관리번호	1-2-8
추진부서	관광진흥과 관광시설운영팀	담당자	김주경(320-2551)
사업구분	계속, 예산	공약이행도	70%

	< 공약목표 >
◈ 태권도 유단자 귀촌마을 조성

□ 사업 개요

○ 위    치 : 설천면 소천리 668-1번지 일원(태권도원 개발예정 2지구)

○ 사업기간 : 2018. ~ 2022.(5년간)

○ 총사업비 : 10,286백만원(국비 4,325, 군비 5,961)

- 당해연도 사업비 : 5,715백만원(당해예산 786, 계속비이월 4,929)

○ 사업내용

① 토  목 : 택지조성 A =53,563㎡ (상·하수도, 도로 등)

② 건  축 : 태권커뮤니티센터(1동), 힐링테라피센터(2동)

③ 전  기 : 가로등 47등 외 건축 전기 1식

④ 한전지중화, KT 통신지중화 : 각 1식

□ 투자계획

(단위:백만원)

재원별	총계	연도별 투자계획
		‘18	‘19	‘20	‘21	‘22~
계	10,286	2,000	2,000	1,000	4,500	786
국 비	4,325	1,000	1,000	500	1,825
도 비
군 비	5,961	1,000	1,000	500	2,675	786
기 타

□ 추진 상황

【추진실적】

○ 전북도, 문체부 사업 사전 협의	:‘19. 03.
○ 사업 변경 승인 검토(전북도)	:‘19. 03.
○ 문체부 사업 변경 검토 및 협의	:‘19. 05.
○ 문체부 사업 변경 최종 승인 확정	:‘19. 12.
○ 개발행위허가, 농지·산지 전용 등 인·허가 완료	:‘20. 05.
○ 부지 조성 및 기반시설 공사착공	:‘20. 06.
○ 주민 설명회 1차	:‘20. 08.
○ 주민 설명회 2차	:‘20. 09.
○ 부지 조성 및 기반시설 공사 계약(2차분)	:‘21. 03.
○ 공사 중지(동절기)	:‘21. 12.
○ 태권도원 지구단위계획 변경 수립 고시 - 무주군 고시 제2022-9호(`22.01.14.)	:‘22. 01.

【‘22년 예산 확보현황】                                    (단위:백만원)

합계	기확보(투자) 예산		금후 확보계획
	기투자	‘22년 본예산	‘22년 1회 추경	‘22년 2회 추경 ~
10,286	9,500	633	153	0

□ 향후 추진계획

○ 사전 입주자 모집공고                            : `22. 05.

○ 분양계약                                        : `22. 06.

○ 택지 준공 예정                                  : `22. 08.

○ 최종 준공                                       : `22. 12.