복합문화도서관 건립

			관리번호	1-2-10
추진부서	시설사업소 도서관팀	담당자	송순호(320-5620)
사업구분	신규, 예산	공약이행도	60%

	< 공약목표 >
◈ 복합문화 공공 도서관 건립 : 1개소

□ 사업 개요

○ 위    치 : 무주군 무주읍 당산리 1178-4번지 일원

○ 사업기간 : 2019 ~ 2023년

○ 총사업비 : 10,639백만원(균특 5,000, 특교세 300, 군비 5,339)

- 당해연도 사업비 : 3,043백만원(균특 1,381, 군비 1,662)

○ 사업내용

① 공공도서관 건립(연면적 2,000㎡)

- 유아·어린이·일반 자료실, 문화교육실, 사무공간 등

② 생활문화센터(문화체육과), 가족센터(사회복지과) 복합개발

- 복합개발 사업비 : 18,100백만원(도서관 10,619, 가족센터 4,127, 생활문화센터 3,354)

- 마주침공간, 다목적홀, 교류소통공간, 공동육아나눔터 등

③ 전문기관 위탁개발을 통해 완성도 높은 복합시설로 조성

- 위탁개발 수탁기관 선정(캠코) 및 계약 : 2020. 3. 24.

□ 투자계획

(단위:백만원)

재원별	총계	연도별 투자계획
		‘19	‘20	‘21	‘22~
계	10,639	20	2,700	2,400	5,519
국 비	5,000		1,200	1,200	2,600
도 비
군 비	5,339	20	1,200	1,200	2,919
기 타	300		300

□ 추진 상황

【추진실적】

○ 복합도서관 건립을 위한 군민 공청회	: ‵19. 7월
○ 건립 타당성 및 기본계획 수립용역 완료	: ‵19. 8월
○ 건립 보조금(12억원) ‘20년 정부 예산안 반영	: ‵19. 9월
○ 전북도 지방재정투자심사 조건부 승인	: ‵19. 10월
○ 공유재산관리계획 의회 의결	: ‵19. 11월
○ ‘20년 예산확보 및 중기지방재정계획 반영	: ‵19. 12월
○ 위탁개발 수탁기관 모집공고(홈페이지, 공문발송)	: ‵20. 1월
○ 제안서 접수, 심사위 구성, 수탁기관 선정	: ‵20. 3월
○ 공유재산 관리 및 개발 위탁 계약(한국자산관리공사)	: ‵20. 3월
○ 수탁기관 개발사업계획서 승인, 건립부지 용도폐지	: ‵20. 5월
○ 설계공모 심사 및 결과 발표	: ‵20. 9월
○ 설계 착수	: ‵20. 10월
○ 전통공예테마파크 내 국유지 매입 완료	: ‵21. 12월
○ 산지전용협의 완료	: ‵21. 12월
○ 문화재 시굴조사 완료	: ‵21. 12월
○ 실시설계 완료	: ‵21. 12월
○ 공사 착공	: ‵22. 03월

【‘22년 예산 확보현황】                                   (단위:백만원)

합계	기확보(투자) 예산		금후 확보계획
	기투자	‘22년 본예산	‘23년 ~
10,639	5,120	3,043	2,476

□ 향후 추진계획

○ 공사 준공 : ‵23. 12.