무주군 농산물 신 유통체계 구축

			관리번호	2-3-22
추진부서	농촌활력과 가공유통팀	담당자	황은미(320-2776)
사업구분	계속, 예산	공약이행도	100%

	< 공약목표 >
◈ 농산물 공동수집장 설치 : 60개소

□ 사업 개요

○ 위    치 : 무주군내 행정리 및 자연마을

○ 사업기간 : 2019. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.

○ 총사업비 : 1,793백만원(군비)

- 2021년 사업비 : 119백만원(군비)

○ 사업내용 : 농산물 소규모마을 공동수집장 설치 및 운영

- 사업규모 : 62동, (개소 당 33㎡ 이내)

- 농산물 공동수집장 순회 수거 판매사업 : 62개소

□ 투자계획

(단위:백만원)

재원별	총계	연도별 투자계획
		‘18	‘19	‘20	‘21	‘22~
계	1,793	-	1,368	293	119	13
군 비	1,793	-	1,368	293	119	13

□ 추진 상황

【추진실적】

○ 무주군 농산물공동수집장 설치 및 운영관리조례 제정	:`19.5.7.
○ 1차 공동수집장 설치공사 완료(6개소)	:`19.10.
○ 2차 공동수집장 설치공사 완료(건축부분 50개소)	:`19.12.31.
○ 1차 설치 6개소 소유권 보존등기 완료	:`20.3.27.
○ 2차 설치 50개소 건축 행정절차 이행	:`20.1.∼8.
○ 2020년 신규 대상지 수요조사 1차	:`20.01.22.
○ 2차 설치 50개소 간판 설치 공사 완료	:`20.01.23.
○ 무주군 농산물 공동수집장 운영계획 수립	:`20.02.05.
○ 2차 설치 50개소 간판 선반 설치공사 발주	:`20.02.26.
○ 무주 농산물 공동수집장 사업수행자 신청 접수	:`20.02.27.
○ 2차 설치 50개소 전기 공사 완료	:`20.03.02.
○ 56개소 CCTV설치 완료	:`20.03.31.
○ 50개소 선반 제작 설치 완료	:`20.04.06.
○ 신규 설치 대상지 기본 및 실시설계 발주	:`20.04.09.
○ 무주군 농산물 공동수집장 운영사업 수행자 선정	:`20.05.28.
○ 무주군 농산물 공동수집장 운영사업 발대식 및 운영	:`20.06.05.∼
○ 기존 시설 활용 계획 수립 및 예산 변경(민자보)	:`20.06.22.
○ 신규 설치 7개소 대상지 확정 및 설계 완료	:`20.07.30.
○ 신규 설치 7개소 공사 완료 (총 63개소)	:`20.09.29.
○ 민간 농산물 수집장 개보수 사업 완료(2개소)	:`20.09.29.
○ 2021년 신규 설치 수요조사 실시	:`21.01.19.
○ 2021년도 신규설치 대상지 현장 점검완료	:`21.02.28.
○ 2021년도 신규설치 대상지 3개소 확정	:`21.03.30.
○ 2021년도 신규설치 대상 기본 및 실시설계 완료	:`21.05.17.
○ 2021년도 공동수집장 농산물 수거·판매 사업 시행	:`21.06.01.
○ 2021년도 수집장 개보수 지원 수요조사	:`21.07.12.
○ 2021년도 신규설치 1개소 건축공사 완료	:`21.08.17.
○ 수집장 운영 실태조사	:`21.10.27.
○ 수집장 1개소 추가 설치 공사 계약	:`21.12.07.
○ 기존 수집장 1개소 이전설치 공사 완료	:`21.12.17.
○ 2021년 농산물 수거판매 사업 운영비 지급 - 70백만원(2,156농가 196톤, 905백만원)	:`21.12.31.

【‘22년 예산 확보현황】                                   (단위:백만원)

합계	기확보(투자) 예산		금후 확보계획
	기투자	‘22년 본예산	‘22년 1회 추경	‘22년 2회 추경 ~
1,793	1,780	13	-	-

□ 향후 추진계획

○ 농산물 공동수집장 수거판매 사업 마을별 홍보          : ‘22. 4. ~ 5.

○ 마을공동수집장 구축공사(무풍오산) 재착공 및 준공     : ‘22. 5.

○ 공동수집장 농산물 수거·판매 사업 추진               : 계속