경로당 태양광 시설 설치

			관리번호	3-6-45
추진부서	산업경제과 지역경제팀	담당자	김현규(320-2386)
사업구분	신규, 예산	공약이행도	100%

	< 공약목표 >
◈ 관내 경로당 태양광 시설 설치 : 230개소

□ 사업 개요

○ 위    치 : 무주군 관내 경로당

○ 사업기간 : 2020. 1 ∼ 2022. 12.

○ 총사업비 : 1,114백만원(국비 499, 군비 615)

- 2021년도 사업비 : 598백만원(국비 269, 군비 329)

- 2022년도 사업비 : 4백만원(군비 4)

○ 사업내용

① 관내 경로당(마을 또는 군 소유)에 개소당 3㎾ 태양광 발전시설 설치

② 신재생에너지 지역지원사업을 통하여 연도별 순차적 설치

□ 투자계획

(단위:백만원)

재원별	총계	연도별 투자계획
		‘18	‘19	‘20	‘21	`22~
계	1,114			512	598	4
국 비	499			230	269
도 비	0
군 비	615			282	329	4
기 타	0

□ 추진 상황

【추진실적】

○ 경로당 태양광 설치사업 수요조사
- 추진계획 및 수립시달	:‘19. 03.
- 읍면 이장회의시 방문 홍보 : 수요경로당 65개소	:‘19. 04.
- 태양광 설치 제외 경로당 : 총70개소	:‘19. 04.
․ 기설치 18개소 ․ 건축물대장 미존재 36개소
․ 기타 16개소(신축예정6, 아파트2, 개인소유2, 심야전기3, 주민반대2, 자산관리공사관리1)

○ 2020년 신재생에너지 지역지원사업 공모신청	:‘19. 05.
○ 2020년 신재생에너지 지역지원사업 공모 선정	:‘19. 10.
- 경로당 65개소 512백만원
○ 에너지관리공단 사업계획 승인	:‘20. 02.
○ 무주군 경로당 태양광 실시설계 완료	:‘20. 03.
○ 2020년 경로당 태양광 설치공사 완료 (65개소)	:‘20. 06.
○ 신재생에너지센터 프로그램 전산입력 (설치확인 등)	:‘20. 08.
○ 2021년 신재생에너지 공모선정	:‘20. 09.
- 경로당 95개소 598백만원
○ 에너지관리공단 사업계획 승인	:‘21. 02.
○ 2021년 경로당 태양광 설치공사 추진 - 95개소 중 93개소 완료 / 2개소 취소 ※ 2개소 취소 사유: 신축예정 1개소 / 미등기 1개소	:‘21. 4. ~ 10.
○ 2021년 경로당 태양광 설치공사 준공	:‘21. 12.

【‘22년 예산 확보현황】                                   (단위:백만원)

합계	기확보(투자) 예산		금후 확보계획
	기투자	‘22년 본예산	‘22년 1회 추경	‘22년 2회 추경 ~
1,114	1,110	-	4

□ 향후 추진계획

○ 2021년 설치 경로당 상계거래 등록 추진	:‘22. 4.
○ 2022년 태양광 설치사업 계속진행시 수요조사 추진	:‘22. 6.
○ 태양광 발전시설 신설 및 이설 추진	:‘22. 10.