부남 금강변 관광자원 활성화사업

			관리번호	4-8-57
추진부서	관광진흥과 관광지조성팀	담당자	현정복(320-2556)
사업구분	계속, 예산	공약이행도	30%

	< 공약목표 >
◈ 오토캠핑장 조성 1식

□ 사업 개요

○ 위    치 : 부남면 대유리 773번지 일원

○ 사업기간 : 2020. ~ 2024.(5년)

○ 총사업비 : 19,400백만원(균특이양6,200 도비3,100 군비10,100)

- 당해연도 사업비 : 3,000백만원(균특이양1,000 도비500 군비1,500)

○ 사업내용

① 금강 캠핑장 : 캠핑시설, 카라반, 기반시설, 화장실 및 기타편의시설 등

② 부남복합문화센터 : 주민운영을 바탕으로 한 생태전시학습실 및 숙박시설

③ 구름다리 : 금강을 가로지르는 경관체험시설 ex)출렁다리, 경관조망포토존

④ 부남에코로드 : 금강 수변 반딧불이 신비탐사지역 연계 반디탐방로 조성

⑤ 금강테마공원 : 금강 수변 경관 화훼단지를 배경으로 포토존 공간 조성

⑥ 각시폭포 : 금강 수변 경관을 활용한 암벽폭포 조성

⑦ 전망대 : 부남 금강 경관을 전망할 수 있는 지역의 새로운 랜드마크 조성

⑧ 체육공원정비 : 관광객 편익증진을 위한 조경 및 편의시설 재정비

⑨ 잔디광장 및 야외무대 : 휴식공간 및 잔디광장을 조성하여 관광객 편의 도모

⑩ 주차장 : 소형주차장, 대형주차장, 화장실 등

⑪ 줄배체험장 : 부남 금강을 줄배를 활용해 건너는 체험시설 등

□ 투자계획

(단위:백만원)

재원별	총계	연도별 투자계획
		‘20	‘21	‘22	‘23	‘24~
계	19,400	4,300	2,600	3,000	3,500	6,000
균특이양	6,200	1,700	800	1,000	1,000	1,700
도 비	3,100	600	400	500	750	850
군 비	10,100	2,000	1,400	1,500	1,750	3,450
기 타	-

□ 추진 상황

【추진실적】

○ 타당성조사 및 기본계획수립	:‘19. 08.
○ 전라북도 지방재정투자심사(1차)	:‘19. 09.
○ 20년도 신규 동부권발전사업(관광분야) 승인확정	:‘19. 11.
○ 주민설명회 및 전문가 자문회의	:‘20. 05.
○ 사업계획변경(사업위치:봉길마을□부남체육공원)	:‘20. 06.
○ 전라북도 지방재정투자 재심사(2차)	:‘20. 06.
○ 주민간담회	:‘20. 06.
○ 동부권발전위원회 동부권 사업계획변경 승인	:‘20. 07.
○ 기본 및 실시설계용역 착수	:‘20. 12.
○ 기본 및 실시설계용역 주민설명회	:‘21. 02.
○ 무주래프팅협의회 래프팅계류장 관련 사전협의	:‘21. 03.
○ 인허가(군계획시설:공공공지) 및 행정절차이행중	:‘21. 05.
○ 편입토지 협의매입	:‘21. 07.
○ 금강 하천점용허가 관련 대전청 사전협의	:‘21. 09.
○ 주민간담회	:‘21. 11.
○ 금강 하천점용허가 관련 금강유역환경청 사전협의	:‘22. 01.
○ 군관리계획(공공공지) 결정	:‘22. 02.
○ 문화재 표본조사 용역 준공 및 사업시행 승인	:‘22. 03.

【‘22년 예산 확보현황】

(단위:백만원)

합계	기확보(투자) 예산		금후 확보계획
	기투자	‘22년 본예산	‘22년 1회 추경	‘22년 2회 추경 ~
19,400	6,900	3,000		9,500

□ 향후 추진계획

○ 인허가 이행 및 실시설계 완료                 : ‘22. 6.

○ 편입토지매입 완료                            : ‘22. 12.

○ 공사 추진                                     :  ‘22. 7. ~ ’24. 12.