무주읍 강변아파트 밀집지역 주차시설 확충

			관리번호	4-8-62
추진부서	산업경제과 교통행정팀	담당자	정재석(320-2365)
사업구분	신규, 예산	공약이행도	60%

	< 공약목표 >
◈ 무주읍 공영주차장 조성 : 200면

□ 사업 개요

○ 위    치 : 무주읍 시내권

○ 사업기간 : 2020. 01 ~ 2022. 12.

○ 총사업비 : 5,220백만원(국비 2,500, 군비 2,720)

- 당해년도 사업비 : 220백만원(군비 220)

○ 사업내용

① 당산리 주차장 조성사업

- 사업대상지 : 무주읍 당산리 726-1외 4필지

- 대상부지 : 2,732㎡

- 주차대수 : 110대

② 건강보험 옆 주차장 조성사업

- 사업대상지 : 무주읍 읍내리 911-1외 6필지

- 대상부지 : 3,140㎡

- 주차대수 : 125대

□ 투자계획

(단위:백만원)

재원별	총계	연도별 투자계획
		‘18	‘19	‘20	‘21	‘22~
계	5,220			1,458	3,542	220
국 비	2,500			729	1,771	0
도 비
군 비	2,720			729	1,771	220
기 타

□ 추진 상황

【추진실적】

○ 주차장조성사업 계획서 제출	: ’19. 04. 16.
○ 투자심사	: ’19. 04. 22.
○ 균형발전특별회계 예산확보
○ 공유재산심의회 승인	: ’19. 04. 22.
○ 2020년 본예산 확보
○ 감정평가	: ’20. 02. 25.
○ 실시설계발주	: ’20. 03. 26.
○ 토지매입 완료(1,458백만원)	: ’20. 03. 27.
○ 설계변경 및 계약의뢰	: ’20. 05. 15.
○ 폐기물 처리 공사 착공	: ’20. 05. 15.
○ 당산리 공영주차장 조성공사 추진 계획보고	: ’20. 11. 03.
○ 당산리 공영주차장 지정폐기물 위탁처리 용역	: ’21. 06. 03.
○ 건강보험옆 공영주차장 조성사업 대상지 변경 보고	: ’21. 06. 09.
○ 건강보험옆 공영주차장 조성사업 토지매입 진행 중	: ’21. 10. 08.

【‘22년 예산 확보현황】                                   (단위:백만원)

합계	기확보(투자) 예산		금후 확보계획
	기투자	‘22년 본예산	‘22년 1회 추경	‘22년 2회 추경 ~
5,220	5,000	0	0	220

□ 향후 추진계획

○ 당산리 추가확보 부지 예산 부족 : 2회 추경때 예산확보 예정

○ 건강보험옆 주차장 조성사업 공사 착공예정 : 2022. 07. ~

○ 당산리 주차장 공사 착공 : 2022. 08. ~