무주리조트 하수처리력 보강

			관리번호	4-8-65
추진부서	맑은물사업소 하수도팀	담당자	이다현(320-2528)
사업구분	계속, 예산	공약이행도	87%

	< 공약목표 >
◈ 하수처리시설 Q=8,500㎥/일, 하수관로 L=23.17km 개량

□ 사업 개요

○ 위    치 : 설천면 심곡리, 삼공리 일원

○ 사업기간 : 2018. 9. ~ 2024. 12.

○ 총사업비 : 9,047백만원(국비4,252, 수계기금 3,401, 군비 1,394)

○ 사업내용 : 노후하수관로 개선 및 보수 등 개량

① 구천동 공공하수처리시설 및 하수관로 기술진단

- 기술진단 결과에 따라 하수관로 및 하수처리장 개량 실시

② 무주덕유산리조트 단지 내 하수관로 개량공사 추진

- 무주 덕유산리조트와 협의하여 리조트 자체예산 확보하여 긴급보수 실시

③ 구천동지역 노후하수관로에 대해 국고보조사업으로 추진

- 정밀조사용역 → 기본 및 실시설계 → 정비공사 추진

□ 투자계획

(단위:백만원)

재원별	총계	연도별 투자계획
		‘18	‘19	‘20	‘21	‘22~
계	9,047	140	203	0	200	8,504
국 비	4,252	0	0	0	0	4,252
도 비	0	0	0	0	0	0
군 비	1,394	140	203	0	200	851
기 타	3,401	0	0	0	0	3,401

□ 추진 상황

【추진실적】

○ 구천동 하수관로 기술진단 완료	: `18. 12.
○ 등방천 하수관로 개량공사 완료	: `19. 10.
○ 무주 덕유산리조트 오수관로 자체정비(L=181m)	: `20. 12.
○ 2021년 노후하수관로 정말조사용역 본예산확보	: `20. 12.
○ 구천동 노후하수관로 정밀조사용역 착수	: `21. 02.
○ 2022년도 하수도 국고보조사업 신청	: `21. 03.
○ 구천동 노후하수관로 정밀조사용역 준공	: `21. 08.
○ 2022년 노후하수관로 개량사업 국비 예산 확보	: `21. 12.
○ 2022년 노후하수관로 개량사업 도 원가심사 완료	: `22. 03.

【‘22년 예산 확보현황】                                    (단위:백만원)

합계	기확보(투자) 예산			금후 확보계획
	기투자	‘22년 본예산	‘22년 추경	‘23년 ~
9,047	543	1,000	0	7,504

□ 추진계획

○ 실시설계용역 결과를 근거로 국고보조사업 예산확보를 통해 무주리조트를 포함한 구천동지역의 노후하수관로 개량사업 추진

○ 사업추진계획

- 2022. 4.  : 노후하수관로 개량사업 기본 및 실시설계용역 발주

- 2023. 1. ~ 2024. 12. : 노후하수관로 개량공사 추진